문서번호	방송
보존기간
보고일자	2011. 6.
공개여부	공개

담 당	팀 장	부 장	상임이사	이 사 장
협 조	경영지원부장 : 총무회계팀장 : 기획예산팀장 : 시설팀장 :

오디오 TOTAL시스템(PA) 교체 설계 용역 완료 보고

경    주    부

(방 송 팀)

오디오 토탈시스템(PA) 교체 공사 설계 용역 완료 보고

방송팀-138 오디오 토탈시스템(PA) 교체 공사 음향 설계 용역 시행   건에 의거 음향 설계 용역 완료에 따른 보고입니다

Ⅰ.		설 계 용 역 개요

□ 용역 기간 : 2011. 5. 11 ~ 6. 24

□ 용역 업체 : 세인엔지니어링

□ 계약 방법 : 나라장터 공개입찰

□ 계약 금액 : ￦28,650,000(금이천팔백육십오만원정)-VAT포함

□ 예산 과목 : 공단사업비용, 영업비용, 대행사업비, 지급수수료.

Ⅱ.		용 역 추 진 경 과

□ 용역 설계 계약 : 2011. 05. 04

□ 용역 설계 착수 : 2011. 05. 11

□ 기초 설계 협의 : 2011. 05. 20

□ 중간 설계 협의 : 2011. 05. 30

□ 최종 설계 협의 : 2011. 06. 08

□ 설계완료설명회 : 2011. 06. 17

□ 용역 설계 완료 : 2011. 06. 24

Ⅲ.	설 계 완 료 성 과 품 내 용 - ( 별 첨 )

가. 기본설계 성과품

① 기 구축 시스템 측정 진단 검토 보고서

② 기본설계 보고서

나. 실시설계 성과품

① 설계 설명서

② 설계 도면

③ 설계내역서 및 수량산출서

④ 시방서(일반시방 및 특기시방)

⑤ 공정표

⑥ 원가계산서 및 일위대가표

⑦ 자재단가비교표

⑧ 자재 시뮬레이션 보고서

⑨ 설계 감리 기술 검토 보고서

⑩ 스피커 구조 진단 검토 소견서

⑪ 종합 설계 도서 및 CD

Ⅳ.	향 후 추 진 계 획

□ 설치 시공 업체 선정 계약 의뢰 : 7월중 (조달청 계약의뢰)

□ 설치 기간 : 120일 정도 소요(8월 ~ 11월) 예정

□ 설치 완료 : 12월 초 예정